3. РАСЧЁТ ЭЛЕМЕНТОВ СТРОЙГЕНПЛАНА

Расчет бытовых помещений.

Таблица
Наименование помещений | Численность персонала | Нормат.площадь | Расчетная площадь
| | Ед. изм. | Пок-ль |
1. Контора 2. Диспетчерская 3. Гардеробная М Ж 4. Умывальная М Ж 5. Душевая М Ж 6. Туалет М Ж 7. Помещение для обогрева рабочих 8. Сушилка 9. Помещение для приема пищи 10. Помещение для отдыха | 2 1 19 8  19 8  19 8  19 8  23 23 26 23 | м^2/чел м^2/чел м^2/чел м^2/чел  кран/м^2 кран/м^2  м^2/1душ м^2/1душ  м^2/чел м^2/чел  м^2/чел м^2/чел м^2/чел м^2/чел | 4 7 0,5 0,5  0,5 0,5  3 3  0,07 0,14  0,1 0,2 0,23 0,6 | 30 7 9,5 4  9,5 4  10 4  2 2  8 12 6,25 13,2

Номенклатура бытовых помещений

Таблица
Наименование помещений | Расчетная площадь, м2 | Размеры в плане, м | Кол-во | Принятая площадь | Конструкт. характерист.
1. Контора 2. Диспетчерская 3. Санитарно-бытовые помещения для мужчин 4. Санитарно-бытовые помещения для женщин 5. Помещение для обогрева рабочих и сушилка 6. Туалет М Ж 7. Помещение для приема пищи и отдыха рабочих | 30  7 26  16   20   2 2 | 3х6  3х6 3х6  3х6   3х6 | 2  1 2  1   2 | 36  18 36  18   36   3 3 | Система «Универсал» Система «Нива» Система «Днепр» ---!!---!!---  Система «Куб» --- --- --- --- --- --- --- ---  Система «Днепр»

Расчет площади складов.

Т - время расходования материалов;
К - коэффициент неравномерности потребности в материалах, К=1,1;
- коэффициент неравномерности расхода материалов ;
n - показатель запаса  дней.

 - норма складирования определенного материала;
 - коэффициент неравномерности заполнения склада, 

Складируемые материалы

Таблица
Наименование материала | Ед. изм | Р_общ | Т, дни | n | Р_зап | F_склТип склада | | |
1)Кирпич силикатный 2)Фундаментные блоки 3)Плиты покрытия и перекрытия 4)Электроды 5)Стекло 6)Мастика 7)Грунтовка битумная 8)Рулонный материал 9)Линолеум 10)Лаки, краски 11)Обои 12)Паркет штучный 13)Сталь арматурная | шт  шт  шт кг м^2 кг  кг м^2 м^2 кг м^2 м^2 кг | 201633  576  304 93,02 263,6 4658,7  1178,1 3081,7 496,03 266,54 311,8 345,33 225,03 | 84  8  8 8 2 9  9 2 7 10 3 10 84 | 5  5  5 5 5 5  5 5 5 5 5 5 5 | 17162,8  514,8  371,7 83,14 942,4 3701,08  935,9 11017,1 506,66 190,6 743,1 246,9 19,15 | 0,6  0,6  0,6 0,7 0,7 0,7  0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 | 0,6  0,7  0,7 250 200 250  250 15 100 100 100 250 6000 | 1050,4  223,2  120,6 0,5 6,73 21,15  6,24 264,5 7,24 3,18 12,39 1,65 0,1 | О  О  О З З З  З З З З З З З

Ведомость подбора складов

Таблица
Вид склада | Размер в плане | Наименование материалов подлежащих хранению | Площадь, м^2
Открытый | 12х6 - 10 | Кирпич, плиты перекрытия, лестничные марши и площадки. | 720,0
Закрытый | 12х6 - 4 | Электроды, мастика, грунтовка, линолеум, плинтус деревянный, стекло, олифа, колер, гипс, обои, керамическая плитка, паркет штучный, сталь арматурная, рубероид, плита пенобетонная. | 288,0

Расчет водоснабжения

q_пр - нормативный расход воды на производственные нужды;
k_1 - коэффициент спроса;
t_см=8ч. - продолжительность рабочей смены;
n - количество потребителей.

Расчет потребности во временном водоснабжении на производственные нужды.
Таблица
Потребитель | Един. изм. | Кол-во воды, л | Удельн расход, л/с | Коэф. неравн потреб | Продол потреб воды,ч | Расход воды, л/с
1)Работа экскаватора 2)Кран 3)Штукатурные работы 4)Малярные работы 5)Приготовление цементного раствора 6)Приготовление известкового раствора | Маш/ч Маш/см М^2 М^2  М^3  М^3 | 48 155 24841,74 52,14  1827,02  425,73 | 15 15 7 0,5  170  250 | 2 1,1 1,6 1,6  1,6  1,6 | 48 1240 520 120  1440  520 | 0,0100 0,0014 0,1784 0,0116  0,1150  0,1092

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды.

- максимальное кол-во рабочих в смену, чел.
qх/б - норма потребления воды на одного человека в смену(qх/б=15л.).
К2 - коэффициент неравномерности для данной группы потребителей, К2=1,2.
Qдуш-норма удельного расхода на одного пользующегося душем(qдуш=30л.).
К3 - коэффициент учитывающий число пользователей душем, К3=0,4.
tдуш - продолжительность пользования душем, tдуш=0,5ч.

поэтому  

По расчетному расходу воды определяем диаметр максимального ввода временного водоотвода.

v - скорость воды в трубах, v=2м/с.

Принимаем Д=89мм.
Расчет потребности во временном электроснабжении.
Расход энергии

Ртр - требуемая мощность источника электроэнергии или трансформатора, кВт;
К - коэффициент учитывающий потери мощности в сети К=1,05 - 1,1;
Рс - мощность машин и других силовых потребителей, кВт;
Рп - мощность, требуемая на производственные нужды, кВт;
Ров - мощность, требуемая на внутреннее освещение, кВт;
Cosφ - коэффициент мощности в сети;
Кс1, Кс2, Кс3, Кс4 - коэффициенты спроса.

Расчет потребности во временном электроснабжении
Таблица
Наименование потребителей | Един. изм. | Кол-во | Удельн. мощность на ед.изм | Кс | Cosφ | Требуемая мощность, кВт
Силовая электроэнергия
1. Экскаватор 2. Гусеничный  кран 3. Сварочный аппарат 4. Подъемник | шт шт  шт шт | 1 1  3 2 | 80 60  10 30 | 0,5 0,3  0,8 0,3 | 0,6 0,5  0,4 0,7 | 66,67 72,00  60,00 25,71 224,38
Наружное освещение
1. Производство механизированных земляных работ 2. Монтаж строительных конструкций 3. Кирпичная кладка 4. Такелажные работы 5. Проходы и проезды 6. Охранное освещение | Вт/м^2  Вт/м^2  Вт/м^2 Вт/м^2 Вт/м^2  Вт/м^2 | 850  850  850 850 0,05  5600 | 1*10^-3  3*10^-3  3*10^-3 2*10^-3 5  1,5*10^-3 | 1  1  1 1 1  1 | 1  1  1 1 1  1 | 0,85  2,55  2,55 1,10 0,25  8,40 16,30
Внутреннее освещение
1. Отделочные работы 2. Конторские и бытовые помещения 3. Душевые и уборные 4. Склады открытые 5. Склады закрытые | Вт/м^2  Вт/м^2 Вт/м^2 Вт/м Вт/м^2 | 850  108 99 693 90 | 2*10^-3  2*10^-3 2*10^-3 2*10^-3 2*10^-3 | 0,8  0,8 0,8 0,35 0,35 | 1  1 1 1 1 | 10,20  1,80 1,19 8,32 1,08 22,09

Рассчитаем количество прожекторов

Р - удельная мощность, 

;

Е - освещенность, лк;
S - размер площадки подлежащей освещению, м2
Рл - мощность лампы прожектора, Рл=1000Вт

Технико-экономические показатели стройгенплана.
Показатель | Обозначение | Ед. изм. | Кол-во
Площадь участка | F_уч | м^2 | 11040
Площадь строящегося здания | F_зд | м^2 | 1176
Площадь временных сооружений | F_вр | м^2 | 804
Площадь складов | F_скл | м^2 | 1008
Площадь дорог | F_дор | м^2 | 342
Протяженность временной канализации | | м | 5
Протяженность временного электроснабжения | | м | 41,6
Протяженность ограждения | | м | 876
Коэффициент застройки | К_зас | | 0,164
Коэффициент использования территории | К_ит | | 0,302

Технологическая карта на каменную кладку наружных стен.

Область применения
	Данная технологическая карта разработана на производство каменной кладки наружных стен. Конструкция стены представляет собой облегченную кладку колодцевого типа, в качестве утеплителя принимаем перлитопластобетон (p=200 кг/м^3; λ=0,035 Вт/мºс).
	Все работы выполняются комплексной бригадой в составе:
каменщик 4р - 7 чел.
такелажник 2р - 1чел.
плотник 4р - 1 чел.
теплоизолировщик 4р-1чел.
машинист 6р - 1 чел.
Работы ведутся в две смены с помощью одного крана МКГ-40. Технологическая карта разработана в соответствии со СНиП 3.03.01-81 “Несущие и ограждающие конструкции” и СНиП «Безопасность труда в строительстве»12-04-2002 ч.2 “Строительное производство”.
Указания по ТОСП
Кладка кирпичных стен выполняется ярусами высотой 1м. Рабочая зона каменщика составляет 600 мм. Зона складирования должна соответствовать ширине поддонов с кирпичом и ящиков с раствором. Расстояние между поддонами с кирпичом и ящиками с раствором не менее 400 мм. Общая ширина рабочего пространства составляет 2400 мм.
	Запас кирпича на рабочем месте принимается из расчета двух часовой потребности. Растворные ящики на рабочем месте заполняются раствором за 10-15 мин. до начала кладки, в процессе кладки запас материалов пополняется.
	Подача раствора на рабочее место каменщиков производится при помощи раздаточного бункера в непосредственно в растворные ящики вместимостью 0.75 м^3.
	Для соблюдения прямолинейности стен и толщины рядов в процессе кирпичной кладки применяется причалка - прочный крученый шнур. Вертикальность кладки углов стен проверяется при помощи отвеса, горизонтальность рядов кладки проверяется правилом и уровнем. При устройстве облегченной конструкции стены должна быть, во-первых, решена задача надежного соединения кирпичных стоек между собой, во-вторых, обеспечена равномерность распределения теплоизолирующего материала по высоте и исключение его просадки при эксплуатации здания.
	Облегченную кладку необходимо предохранять от переувлажнения, во время сильного дождя их укрывают подручными материалами. 

Ведомость объемов работ.
Таблица 
Наименование работ | Един. изм. | Кол-во работ | Формула подсчета
1.Изоляция фундаментов | 100м^2 | 1,13 |
2.Устройство и разборка инвентарных подмостей | На 1м^3 кладки | 1172,45 |
3.Прием и подача кирпича краном | 1000шт. | 468,98 |
4.Прием и подача раствора | м^3 | 259,11 |
5.Кладка наружных стен колодцевого типа | м^3 | 1172,45 |
6.Приготовление и подача утеплителя | м^3 | 588,74 |
7.Заполнение пустот кладки утеплителем | м^3 | 588,74 |

Расчет захваток

;  где Q_кп - общий объем кладки.

; ;
; 
L_захв=27,6м.

Расчет комплексной бригады.
Принимаем Т=30дней.

Принимаем бригаду из 9-ти человек:
Каменщик 4р. - 7человек 
Машинист 6р. - 1человек
Термоизолировщик-такелажник 4р - 1человек
Плотник-термоизолировщик 4р - 1человек

Используемые машины и механизмы.
Таблица 
Наименование | Марка, ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Норм. кол на 100 рабочих | Треб. кол-во шт.
Молоток электрический Скарпели для каменных работ Молоток-кирочка МКИ Молоток кулачек типа МКИ Скребок металлический  Лопатка растворная типа ЛР Кельма для бетонных и каменных работ типа КБ Конопатки стальные типов К-40, К-50 Расшивки стальные типов Р1 и Р2 Метра складной металлический Шнур разметочный  Отвесы стальные типов от 600, от 1000 Угольник деревянный Уровень стальной, строительный типа УС-1 Уровень гибкий (водный) | МЭ-4202А ТУ-22-4399-79* ГОСТ 11049-83 ГОСТ 11049-83 ТУ-22-4629-80 ГОСТ 3620-76  ГОСТ 9533-81 ТУ-22-4301-82 ГОСТ 12803-76 МСМ 49-77 ТУ-22-5076-81 ГОСТ 7948-80 ТУ-22-3949-77 ГОСТ 9416-83 ТУ-25-11760-77 | шт. шт. шт. шт. шт. шт.  шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 2 35 100 35 10 50  100 10 60 50 50 60 20 10 5 | 1 3 7 3 1 4  7 1 5 4 4 5 2 1 1

Пооперационный контроль качества при производстве и приемке каменных работ.
Таблица 
Операция подлеж. контролю | Состав контроля | контроль качества
| | приспособ. | время | проверяющий
кладка наружных стен | Толщина конструкции Отметки опорных поверхностей Ширина простенков Ширина проемов Смещение вертикальных осей оконных проемов от вертикали Смещение осей конструкции от разбиваемых осей Отклонение поверхностей и углов кладки от вертикали Толщина швов кладки Отклонение рядов кладки от горизонтали Неровности на поверхности кладки | линейка -//- -//- -//- уровнем теодолит теодолит  линейка  нивелир  уровень | после работы до и после после работы -//- -//- -//- -//- -//-  -//- | - -  -  -   геодезист геодезист  геодезист-

Техника безопасности

	Место работы машин должно быть определено так, что бы было обеспечено пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирования. В случае, когда машинист, управляющий краном, не имеет достаточную обзорность работ его пространства или не видит рабочего (специально выделенного), подающего ему сигналы, между машинистом и сигнальщиком необходимо установить двух стороннею радио или телеграфную связь. В зоне работы должны быть установлены знаки безопасности и предупредительные надписи.
	Оставлять без надзора машины с работающим (включенным) двигателем не допускается. Не допускается выполнение работ в гололедицу, туман, снегопад, град. При перемещении и подаче на рабочее место грузоподъемными кранами кирпича и раствора следует применять поддоны, контейнеры, бункеры, грузозахватные устройства, исключающие падение груза при подъеме. 
	Уровень кладки после каждого перемещения средств подмащивания должен быть не менее чем а 0,7 м. выше уровня рабочего настила или перекрытия. не допускается кладка наружных стен толщиной до 0,75м в положении стоя на стене. Не допускается кладка стен зданий последующего этажа без установки несущих конструкций междуэтажного перекрытия.

Технико-экономические показатели.

. Нормативные затраты труда рабочих 
,09чел.час
. Нормативные затраты машинного времени 
,59маш.час
. Заработанная плата рабочих в ценах 1984г. 
-54 руб.-коп.
. Заработанная плата механизированных работ в ценах 1984г. 
-76 руб.-коп. 
. Продолжительность выполнения работ 
Т = 34 дня
. Выработка на одного рабочего в смену.