ВВЕДЕНИЕ

Важную роль в обеспечении надежности работы и увеличении эффективности использования электрического и электромеханического оборудования играет его правильная эксплуатация, составными частями которой является, в частности, хранение, монтаж, техническое обслуживание и ремонт. Важным резервом является также правильный выбор оборудования по мощности и уровню использования.
Целью данной курсовой работы является расчет технико-экономических показателей при монтаже электрооборудования фрезерного участка механического цеха.
Задачи курсовой работы:
•	составить сводную ведомость монтируемого оборудования;
•	рассчитать численность работающих;
•	рассчитать заработную плату работающих;
•	рассчитать стоимость материалов;
•	рассчитать необходимое количество электроэнергии в денежном выражении;
•	рассчитать затраты на охрану труда;
•	рассчитать затраты на вспомогательные материалы;
•	составит смету на выполнение электромонтажных работ;
•	составить сводную ведомость технико-экономических показателей;
•	представить графически структуру себестоимости.

1.	Расчет стоимости монтируемого оборудования, расчет амортизационных отчислений

Таблица 1
Сводная ведомость монтируемого электрооборудования
Наименование оборудования	Ед. изм.	К-во	Тип оборуд.	Цена оборуд. (руб.)	Цена с учетом транспорт. расходов (руб.)	Общая стоимость оборуд., (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	
Вентиляторы	шт.	2	ВД-4	14500	15950	31900	
Сварочные аппараты	шт.	2	САИ 250	4000	4400	8800	
Токарные автоматы	шт.	4	1Е713	1020000	1122000	4488000	
Круглошлифовальные станки	шт.	2	3М151	2800000	3080000	6160000	
Сверлильные станки	шт.	4	2М112	1150000	1265000	5060000	
Токарные станки	шт.	4	16К20	1100000	1210000	4840000	
Строгальные станки	шт.	4	7212Г	1100000	1210000	4840000	
Фрезерные станки	шт.	2	6Б4431	1450000	1595000	3190000	
Расточные станки	шт.	2	2622Г	950000	1045000	209000	
Кран мостовой	шт.	1	КМ-30	300000	330000	330000	
Рабочее освещение	шт.	96	ЛСП 02	1300	1430	137280	
Аварийное освещение	шт.	11	DL-11	600	660	7260	
Защитная аппаратура	шт.	14
11
3	НПН-2-60
НПН-2-100
НПН-250	1200
1300
1320	1320
1430
1452	18480
15730
4356	
Измерительные трансформаторы тока	шт.	1
3
2	ТВЛМ 10 30/5
ТВЛМ 10 40/5
ТВЛМ 10 200/5	3000
4500
7500	3300
4950
8250	3300
14850
16500	
Распределительные устройства	шт.	3
1
1	ПР85011
ПР85023
ШАВР	3200
3500
3100	3520
3850
3410	10562
3850
3410	
Шинопровод	м	10	ШРА	4500	4950	49500	
Трансформатор силовой	шт.	1	ТМ 160 10/0,4	95000	104500	104500	
Щиты освещения	шт.	2	ОЩ-6	769	845,9	1691,8	
Итого:	29517075,8	

В данной таблице общая стоимость монтируемого оборудования рассчитана с учетом 5% доплаты на транспортные расходы от стоимости оборудования
Амортизационные отчисления рассчитаны из расчета 12% от стоимости оборудования.

Ао =29517075,8*0,12=3542049,1 руб.

2. Расчет численности рабочих

Расчет численности основных рабочих.
Расчет производим по формуле:

Pp, (1)

где Тн - нормативная трудоемкость данного предприятия (чел/час);
Км — календарный срок монтажа по сетевому графику; Tн
Nв - планируемый уровень выполнения нормы (час);
Тсм — количество смен;
Вн - количество часов в смену (час)
Полученный результат сводим в табл. 2 и распределяем по квалификационному составу.
Рассчитаем численность основных рабочих по формуле (1):

Pp ,

Принимаем 23 человека.
Общее число человеко-разрядов:

2*3+3*6+4*4+5*8+6*2=92

Средний тарифно-квалификационный разряд основных рабочих: 92/23=4

Таблица 2
Сводная ведомость основных рабочих
Наименование профессии	Кол-во	Разряд	
		1	2	3	4	5	6	
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	10		2	2	2	3	1	
Электромонтажник по распределительным устройствам	6		1	2	1	2	1	
Электромонтажник по электрическим машинам	4			2	2			
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию	3				1	1	1	
Всего	23		3	6	5	6	3	

Определение численности вспомогательных рабочих
Количество вспомогательных рабочих составляет 30% от количества основных рабочих

Nвсп.раб=23*0,3=7 (чел).

Принимаем 7 человек.

Таблица 3
Ведомость вспомогательных рабочих
Наименование профессии	Кол-во	Разряд	
		1	2	3	4	5	6	
Электросварщик	3				1	1	1	
Слесарь - электромонтажник	2				1	1		
Электрослесарь строитель	2			1	1			
Всего	7			1	3	2	1	

Общее число человеко-разрядов:

1*3+3*4+2*5+1*6=31

Средний тарифно-квалификационный разряд вспомогательных рабочих:

31/7 = 4,43

Определение численности руководителей, специалистов и служащих
Число руководителей, специалистов и служащих принимается в процентном отношении от общего числа основных и вспомогательных рабочих:

23 + 7 = 30 (чел)

30 человек — общее число рабочих.
Руководителей 10-12 %:

30*0,1 =3 (чел)

Принимаем 3 человека.
Специалистов 8-10 %:

30*0,08 =2,4 (чел)

Принимаем 3 человека.
Служащих 4%:

30*0,04 = 1,2 (чел)

Принимаем 2 человека. Полученные результаты заносим в таблицу 4.

Таблица 4
Списочный состав рабочих
Наименование категории работающих	Количество, (чел)	Отношение к числу работающих, %	
Основные	23	60	
Вспомогательные	7	18	
Руководители	3	9	
Специалисты	3	9	
Служащие	2	6	
Итого:	38	100	

3. Расчет заработной платы рабочих

Фонд заработной платы основных рабочих определяется по повременно-премиальной системе по формуле:

ЗПо = Спов*Fэ*n,(2)

где Спов - часовая тарифная ставка работающего, соответствующего разряда квалификации по данным базового предприятия (приведена в табл. 5);
Fэ - эффективный фонд рабочего времени;
n - количество работающих данного разряда.

Таблица 5
Часовые тарифные ставки согласно разряда квалификации
Разряд	Часовая тарифная ставка	
1	48,6	
2	51	
3	52,7	
4	53	
5	56,2	
6	58,4	

Эффективный фонд рабочего времени рассчитывается по формуле:

Fэ= Кп*Прд*Ксм,(3)

где Кп - критический путь;
Прд продолжительность рабочего дня;
Ксм - сменность работы.

Fэ= 44*8*2=704 (час)

Рассчитаем заработную плату поразрядно основных рабочих согласно часовой тарифной ставке.

ЗПо2=51*704*3=107712 руб.
ЗПо3=52,7*704*6=222604,8 руб.
ЗПо4=53*704*5= 186560руб.
ЗПо5=56,2*704*6=2373388,8руб.
ЗПо6=58,4*704*3=123340,8руб.

Заработная плата основных рабочих составит:

∑ЗП =107712+222604,8+186560+2373388,8+123340,8 =3013606,4

Размер премии - 40 %.
Доплата -10%.

Премия =3013606,4*0,4=1205442,56руб.
Доплата =3013606,4*0,1=301360,64руб.

Общий фонд заработной платы основных рабочих включает: основную заработную плату, премии, доплаты.

ЗПобщ=3013606,4+1205442,56+301360,64=4520409,6руб.

Страховые взносы составляют 30% от основной и дополнительной заработной платы.

СВ = 4520409,6*0,3 = 1356122,88руб.

Заработная плата вспомогательных рабочих рассчитывается по повременно-премиальной системе оплаты труда. Заработную плату рассчитываем по формуле (2).

Fэ= 44*8*2 = 704 (час)

Рассчитаем заработную плату поразрядно вспомогательных рабочих согласно часовой тарифной ставке:

ЗП осн3=52,7*704*1=37100,8 руб.
ЗП осн4=53*704*3=111936 руб.
ЗП осн5=56,2*704*2=73129,6 руб.
ЗП осн6=58,4*704*1=41113,6 руб.

Заработная плата вспомогательных рабочих составит;

∑ЗП =37100,8+111936+73129,6 +41113,6 =263280 руб.

Размер премии - 50%.
Доплата -15%.

Премия =263280*0,5=131640 руб.
Доплата = 263280*0,15= 39492 руб.

Общий фонд заработной платы вспомогательных рабочих включает: основную заработную плату, премии, доплаты.
ЗПвсп=263280+131640+39492=434412 руб.

Страховые взносы составляют 30% от основной и дополнительной заработной платы.

СВ =434412*0,3 = 130323,6руб.

Расчет заработной платы руководителей, специалистов, служащих производится по формуле (4):

ЗПрсс = Ок/22*Кп*n(4)

где Ок - оклад; Кп - критический путь;
n -количество специалистов данной профессии.

Таблица 6
Состав руководителей, специалистов, служащих, их оклад и размер доплат
Наименование должности	Кол-во (чел.)	Оклад, (руб.)	%доплаты	
			премия	доплата	
1	2	3	4	5	
Руководители:
Начальник участка
Главный механик
Мастер участка	
1
1
1	
15000
15000
15000	
50
50
50	
30
30
30	
Специалисты:
Механик
Инженер-технолог
Бухгалтер	
1
1
1	
13000
13000
9000	
50
50
50	
30
30
30	
Служащие:
Чертежник
Табельщик	
1
1	
7000
7000	
50
50	
30
30	

Заработная плата руководителей, специалистов, служащих рассчитываем по формуле (4):
смета электромонтажный заработный амортизационный
ЗПначуч = 15000/22*44*1=30000 руб.
ЗПглав мех=15000/22*44*1=30000 руб.
ЗПмасуч=15000/22*44*1=30000 руб.
ЗПмех=13000/22*44*1=26000 руб.
ЗПин тех=13000/22*44*1=26000 руб.
ЗПбух = 9000/22*44*1=18000 руб.
ЗПчер=7000/22*44*1=14000 руб.
ЗПтаб=7000/22*44*1=14000 руб.

Заработная плата руководителей:

∑3П =30000 +30000 +30000 =90000 руб.

Заработная плата специалистов:

∑3П =26000+26000+18000=70000 руб.

Заработная плата служащего:

∑ЗП =14000+14000=28000 руб.

Размер премии руководителей:

90000*0,5 = 45000руб.

Размер премии специалистов:

70000*0,5 = 35000 руб.

Размер премии служащих:

28000*0,5= 14000 руб.

Размер доплат руководителей:

90000*0,3 = 27000 руб.

Размер доплат специалистов:

70000*0,3 = 21000 руб.

Размер доплат служащего:

28000*0,3 = 8400руб.

Страховые взносы составят 30% от основной и дополнительной заработной платы.
Страховые взносы руководителей:

90000+45000+27000=162000 руб.
162000*0,3=48600 руб.
Страховые взносы специалистов:

70000+35000+21000=126000 руб.
126000*0,3=37800 руб.

Страховые взносы служащего:

28000+14000+8400=50400 руб.
50400*0,3=15120 руб.

Произведенные расчеты занесем в таблицу 7.

Таблица 7
Сводная ведомость общего фонда заработной платы
Категория рабочих	Основная зар. плата, (руб.)	Премия, (руб.)	Доплата, (руб.)	Общая зар. плата, (руб.)	Страховые взносы, (руб)	
1	2	3	4	5	6	
Основные	3013606,4	1205442,56	301360,64	4520409,6	1356122,88	
Вспомогательные	263280	131640	39492	434412	130323,6	
Руководители	90000	45000	27000	162000	48600	
Специалисты	70000	35000	21000	126000	37800	
Служащие	28000	14000	8400	50400	15120	
Итого:	3464886,4	1431082,56	397252,64	5293221,6	1587966,48	

Среднемесячная зарплата основных рабочих:

98269,8 руб.

Среднемесячная зарплата вспомогательных рабочих:

31029,4 руб.
Среднемесячная зарплата одного человека:

 3165,8 руб.

4. Выбор материалов и расчет их стоимости

Выбор материалов необходимых для монтажа производится на основании рекомендаций по технологии производства и ведомости физических объемов электромонтажных работ. Произведем расчет количества и стоимость материалов, занесем в таблицу 8.

Таблица 8
Материалы и их стоимость
Материалы	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость с учетом доставки, руб.	Общая стоимость, руб.	
1	2	3	4	5	
Провода типа:
ПВ 5х2
ПВ 5х4
ПВ 5х6
ПВ 5х16	
32м
20м
30м
12м	
2,30
3,30
4,20
7,20	
2,53
3,63
4,62
7,92	
58,19
130,68
64,68
546,48	
Кабель типа:
ВВГнг 5х10
ВВГнг 5х16
ВВГнг 5х35
ВВГнг 5х70	
18м
24м
48м
66м	
228
340
560
770	
250,8
374
616
847	
2006,4
7480
17248
32186	
Заземление
Электрод стальной Ш16;1=5м
полоса стальная 40х40	
22м
105м	
78
103	
85,8
113,3	
858
14502,4	
Муфта концевая 3кВТп-1, внутр. утановки4кВТп-1	1 шт
1 шт	935
1025	1028,5
1127,5	1028,5
1127,5	
Изолента ХБ	5 рулонов	68	74,8	374	
Дюбель	1000шт	1,8	1,98	1980	
Болт	40 шт	12,4	13,64	545,6	
Гайка	40 шт	8,3	9,13	365,2	
Коробка распаячная	30шт	15,40	16,94	508,2	
Припой ПОС61	0,5 кг	854	939,4	469,7	
Малярный скотч	20 рул.	35,50	39,05	781	
Хомут кабельный	300 шт	0,4	0,44	132	
Скоба	35	0,3	0,33	11,55	
Краска черная	5кг	190	209	1945	
Растворитель	2 кг	70	77	154	
Кисть малярная	4шт	15	16,5	66	
Плакаты	26 шт	8,5	9,35	243,1	
Бирки	100	18	19,8	1980	
Клей 88	0,9кг	250	275	247,5	
Мастика МБ 70/60	1кг	23	25,3	25,3	
Электрод МР-3	5кг	94	103,4	517	
Лак пропиточный	2кг	107,38	118,12	236,24	
Набор инструмента	10шт	3400	3740	37400	
Итого:				158344,9	

В данной таблице общая стоимость материала рассчитана с учетом 10% транспортных расходов на доставку от цены материала за единицу.
Затраты на вспомогательные материалы берутся в размере 5% от фонда основной заработной платы основного рабочего.

Звспом.мат.=ЗПосн.р.х0,05 руб.= 3013606,4* 0,05=150680,32 руб.

5. Расчет потребного количества электрической энергии и ее стоимость

Затраты на электрическую энергию определяем по формуле:

Сэ = Цч Ч Wэ (5)

Где Цч– стоимость 1 кВт / ч электроэнергии = 2,40 руб.;
Wэ– расход мощности за период производства электромонтажных работ.
Wэнайдем по формуле:

Wэ = NустЧ Fэ ЧKз Чηо/ Kс Ч ηд, (6)

где Nуст - установленная мощность электроприемников всех используемых при производстве электромонтажных работ;
Fэ- эффективный фонд производственного времени;
Kз = 0,7 - средний коэффициент загрузки оборудования;
ηо = 0,75- коэффициент одновременной работы оборудования;
Kс = 0,95- коэффициент потерь в электросети;
ηд=0,85 - коэффициент полезного действия электродвигателя

Таблица 9
Перечень электроприемников, используемых при производстве электромонтажных работ и их установленная мощность
Наименование	Мощность одного потребителя, кВт	Кол-во, шт	Общая мощность эл. приемников, кВт	
1. Перфоратор	1	2	2	
2. Электромолоток	2	1	2	
3. Электропаяльник	0,01	2	0,02	
4. Сварочный аппарат	20	1	20	
5. Углощлифовальная машина	1,5	1	1,5	
6. Гайковерт	0,52	2	1,04	
Итого:			26,56	

Определяем расход мощности за период производства электромонтажных работ по формуле (6):

Wэ = 26,56 Ч 704 Ч 0,7 Ч 0,75/ 0,95 Ч 0,85 = 8783,3 кВт

Рассчитаем затраты электроэнергии по формуле (5):

Сэ = 2,40 Ч 8783,3 = 21079,92 руб.

6. Затраты на охрану труда

Затраты на охрану труда и обеспечение техники безопасности определяются из расчета 2% от фонда заработной платы основных рабочих.

Зохр.т.=ЗПосн.р. х 0,02руб.=0,02 *3013606,4= 60272,1руб

7. Расчет сметы затрат на выполнение электромонтажных работ

На основании ведущих расчетов составляем смету затрат, которая состоит из прямых и косвенных затрат. Полученные результаты сводим в таблицу 10.

Таблица 10
Смета затрат на электромонтажные работы
Статьи затрат	Проектная стоимость	
	Сумма, (руб.)	% к итогу	
1	2	3	
	Прямые расходы		
1. Стоимость материалов	158344,9	1	
2. Основная заработная плата основных рабочих	3013606,4	5,6	
3. Дополнительная заработная плата	1506803,2	2,8	
4. Итого:	4678754,5		
	Косвенные расходы		
5. Накладные расходы	4225361,44	90,6	
6. Итого:	8904115,9	100	

В состав накладных расходов входит: затраты на силовую электроэнергию, заработная плата вспомогательных рабочих, руководителей, специалистов, служащих, амортизация, затраты на вспомогательные материалы и охрану труда.

8. Технико-экономические показатели

Таблица 11
Технико-экономические показатели
Наименование показателей	Числовые значения	
1	2	
1. Продолжительность электромонтажных работ (ч.)	704	
2. Общая численность работающих, в том числе: (чел.)
- основных
- вспомогательных
- руководителей
- специалистов
- служащих	38
23
7
3
3
2	
3. Средний тарифный разряд рабочих
- основных
- вспомогательных	
4
4,43	
4. Общая стоимость оборудования (руб.)	29517075,8	
5. Нормативная трудоемкость основных рабочих	20132	
6. Фонд заработной плата основных рабочих (руб.)	4520409,6	
7. Среднемесячная зарплата основных рабочих	98269,8	
8. Среднемесячная зарплата вспомогательных рабочих	31029,4	
9. Заработная плата одного работающего (руб.)	3165,8	
10. Фонд заработной платы работающих(руб.)	5293221,6	
11. Затраты на электроэнергию (руб.)	21079,92	
12. Затраты на охрану труда (руб.)	60272,1	
13. Затраты на вспомогательные материалы (руб.)	150680,32	
14. Затраты на электромонтажные работы (руб.)	8904115,9	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполненных экономических расчетов были вычислены технико-экономические показатели при монтаже электрооборудования цеха. Произведен расчет стоимости оборудования (3542049,1 руб.), затраты на электроэнергию (21079,92 руб.), затраты на электромонтажные работы (8904115,9 руб.)
Рассчитана численность, заработная плата всего работающего персонала.
По произведенным расчетам составлена смета затрат на выполнение электромонтажных работ.
Цель и задачи курсовой работы выполнены

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная:
1.	Экономика предприятия: Учебник / Под ред. Проф. Н.А. Сафронова. – М.: Юристъ, 2009. – 608 с.
2.	Экономика предприятия (фирмы): практикум / Под ред. Проф. О.И. Волкова, проф. В.Я. Позднякова. – М: ИНФРА – М, 2009 – 331 с. – (серия «Высшее образование»)
3.	Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия - М: ИНФРА – М, 2010.-259 с.
Дополнительная:
1.	Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: Учеб. пособие / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. - М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 592 с.
2.	В.М. Козырев. Основы современной экономики. М., Финансы и статистика, 2008.
3.	П. Грузинов. Экономика предприятия. Москва; Финансы и статистика, 1999
4.	Экономика энергетики: Учебное пособие / В.Н. Нагорная - Владивосток, 2007-157 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Структура себестоимости электромонтажных работ

Размещено на Allbest.ru